г
Подлежит
обязательному возврату
в аппарат Правительства
Ставропольского куарт^ АПШТТИГ
f
о внесении изменений в Договор от 28 июня 2019 г. № 74ШС
о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий», именуемая в
дальнейшем «Фонд», в лице директора Шелкового Андрея Николаевича,
действующего на основании доверенности от 18 февраля 2025 г. № 08-3/55, с одной
стороны, и Ставропольский край, именуемый в дальнейшем «Субъект Российской
Федерации», в лице Губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Ставропольского края от 12 мая 2022 года № 38-кз, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) к
договору от 28 июня 2019 г. № 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1.		В подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слова «до 01 сентября 2025 года» заменить
словами «до 01 сентября 2028 года в соответствии с графиком реализации
мероприятий по переселению граждан из всего аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, являющимся приложением к настоящему
Договору.».
1.2.		Дополнить пунктом 6.2.1 следующего содержания:
«6.2.1. В случае нарушения сроков реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года, установленных графиком реализации мероприятий по переселению
граждан из всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года, Субъект Российской Федерации обязуется уплатить штраф в сумме,
исчисленной из расчета 500 рублей за каждый квадратный метр общей площади
жилых помещений, переселение граждан из которых не было завершено в
установленный данным графиком срок.».
1.3.		Пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.7. Субъект Российской Федерации вправе:
на основании настоящего Договора возвратить на счет Фонда
неиспользованные средства Фонда;
использовать жилые помещения, приобретенные (построенные) в период
с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года за счет финансовой поддержки Фонда,
которые в указанный период не были предоставлены гражданам, подлежащим
переселению из аварийного жилищного фонда, для предоставления гражданам,
подлежащим переселению из аварийного жилищного фонда в рамках региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
город Москва

с?
2
реализуемой Субъектом Российской Федерации с 1 января 2025 года, без
осуществления возврата в Фонд соответствующих средств предоставленной
финансовой поддержки за счет средств Фонда.».
2.		Утвердить график реализации мероприятий по переселению граждан из
всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
согласно приложению к настоящему Соглашению.
3.		Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
4.		Соглашение составлено в двух имеющих равную юридическую силу
экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
От Фонда
От Субъекта Российской
Федерации
г
МП
Шелков	Владимирович

^ ^ Владимиров В.В.
202 года
J
Приложение к Соглашению
от 22, ОН- ЗР2-6
График реализации мероприятий по переселению граждан из всего
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017
наименование субъекта
Российской Федерации:	Ставропольский край
с-
СПРАВОЧНО остаток
аварийного жилищного фонда,
подлежащий расселению на
01.01.2026 по годовому отчету
субъекта Российской
Федерации за 2025 год	Планируемая корректировка
остатка аварийного
жилищного фонда
(исключение пустующего
жилищного фонда, уточнение
по итогам инвентаризации)	Остаток аварийного
жилищного фонда,
подлежащий расселению по
графику в срок до 01.09.2028	
кв. м	кв. М	кв. М	
1	2	3	
15 154,70	418,90	14 735,80	
f
<
		План расселения остатка аварийного жилищного	
№	Год	фонда, признанного таковым до 01.01.2017	
п/п		по годам	нарастающим итогом	
		кв. м	кв. м	
1	2	3	4	
Итого 110			
Ставропольскому краю.			
в том числе:			
1.	2026 год:	14 735,8Q	14 735,80	
2.	2027 год:	J	-	
3.	2028 год	1 /		
	(до 01.09.2028):			
Губернатор
Ставропольского края